군포환경관리소

선택적촉매환원장치(SCR) 촉매 제작구매 및 설치 시방서

	군 포 도 시 공 사

1. 적용범위

본 시방서는 군포도시공사 군포환경관리소(이하“발주자”)가 계약상대자(이하“도급자”)에게 구매하여 사용할 선택적촉매환원장치(SCR) 촉매 제작구매 및 설치에 관한 사항으로서 본 시방서에 정한 사항은 본 구매 관련 계약 문서 중 다른 문서에 우선하여 적용한다.

2. 제출서류

“도급자”는 계약 후 15일 이내에 아래 자료 중 승인에 관련된 자료를 “발주자”에게 제출하여 승인을 득하여야 하며, 설치가 완료된 후 7일 이내에 준    공서류를 제출하여야 한다. 또한 “발주자”가 그 외 도서를 요구할 경우에는 그때마다 지체없이 제출하여야 하며 제출부수는 2부를 기준으로 하고 필요에     따라 증감할 수 있다.

가. 예정공정표, 착수계/납품계, 안전관리자 선임계 및 현장대리인 선임계 (재직증명서 첨부), 중량물취급 작업계획서

나. 물품 기술사양서(Data Sheet, 성능곡선 포함)

다. 물품 제작도면 및 시운전 관련자료

라. 물품 시험․검사 계획서 및 절차서 등

마. 촉매의 제작과정 사진첩을 납품시 제출

바. 설치작업 전 과정을 촬영한 사진첩 및 완료보고서를 완료시 제출

※도급자의 역무범위는 촉매 납품 및 설치와 관련된 작업을 포함한다.

3. 목 적

본 시방서는 군포환경관리소의 소각로에서 발생되는 배출가스 중 다이옥신류 및 질소산화물(NOx)을 제거하는 선택적촉매환원장치(SCR)의 촉매가 장기간 사용으로 인하여 오염물질 제거효율이 저하되므로 시방서가 제시한 품질의 촉매를 제작구매, 설치하여 다이옥신류 등 오염물질을 법적기준 이내로 처리하고 소각장 가동을 원활히 하는데 있다.

4. 촉매 구매개요

가. 환경관리소 시설현황 및 가스조건

항 목	단 위	설계조건	비 고
소 각 용 량	톤/일	200
SCR 설치위치	-	Bag Filter 후단
연소가스 유량	N㎥/hr	50,000~59,000	SCR 입구
연소가스 온도	℃	205~210	SCR 입구

나. 품질 및 규격(우리공사 촉매사양)

구입물품명	촉 매 사 양	비 고
SCR용 촉매 (NOx 및 Dioxins 제거용)	Total Volume: 3.863㎥/1 layer	1 layer 구매조건. [기존에 설치되어 있는 촉매사양 을 근거로 한 기준임]
	Number of modules with catalyst: 9 for 1 layer
	Type : 압출성형 Honeycomb
	Element Dimension: 150*150* 530mmH
	Element pitch: 4.2mm
	Module Dimension: 950L× 950L× 845H
	촉매조성(재질): TiO2/WO3/V2O5
	Specific Surface: 800㎡/㎥ 이상
	Module casing material: Carbon Steel SS 400
	SCR 입구 운전온도: 205~210℃	제작사 적정운전 온도 제출

다. 용    도 : 소각로 배출가스 중 다이옥신류 및 질소산화물 제거

라. 구 매 량 : 총 3.863㎥/layer, 9 modules/layer

마. 납품시기 : 2021.10.20까지 공사 내 지정장소 납품

바. 촉매현황 : 총 4layers 中  4layers 설치

기설치된 4layers 中 1layer만 구매하여 하반기 소각로 정지간에 교체추진

5. 촉매 입고(납품)

가. 입고장소 : 군포도시공사 환경관리소 내 지정장소

나. 위    치 : 군포시 초막골길 101-58 군포환경관리소

다. 입고방법 :

① 촉매계약자는 촉매납품시 운반계획을 직접 우리공사에 사전 통보해야 한다. 또한 대형화물트럭으로 운송 후 지게차를 이용하여 하역하여야 하며, 분류하기 쉽고 단단하게 포장하여야 한다.

② 운반도중 변형 및 파손을 방지하고 수분, 열, 먼지 등 외기조건에 충분히 견딜 수 있도록 포장하여 설치시까지 촉매의 외관 및 기능에 영향이 없도록 해야 한다.

라. 제작 납품기준

① 본 선택적촉매환원장치(SCR) 촉매 제작 구입은 기존에 설치된 촉매와 동등이상으로 제작되어야 하며 설치 후 설비에 과부하가 발생되지 않아야 한다.

②“도급자”는 본 사양서에서 제시한 설계 사양과 동등 또는 이상으로   공급하여 성능이 보증되어야 납품된 것으로 본다.

③ 촉매는 성능 및 기능에 있어 어떠한 결함도 없어야 하며, 공급되는 촉매는 기존 촉매와 같거나 동등 이상의 품질(수직, 수평 강도 등)이어야 한다.

④ 선택적촉매환원장치(SCR) 촉매 제작 구입에는 촉매 모듈 공급이 포함되며, “도급자”는 납품시 모듈을 제작하여 모듈에 조립된 상태로 납품하여야 한다.

⑤“도급자”는 물품의 품질분석을 위한 시료를 채취하여, 자체품질분석 및 국가공인 분석기관에 분석을 의뢰하여 성적서를 발행받아야 하며, “발주자”는 별도의 시료를 채취하여 공인기관에 분석을 수행할 수 있다.

필요에 의한 “발주자”의 별도시험은 국가공인기관으로 국한되며, 시험결과에 품질 및 사양이 만족되어야 납품행위가 이루어진 것으로 본다.

6. 촉매 재설치 및 교체작업

가. 작업위치 : 군포시 초막골길 101-58 군포환경관리소 공장동 3층

나. 작업기간 : 2021년 하반기 소각로 가동중지 기간중(약 4~5일간)

[2021년 10~12월 소각로 가동중지 기간내 교체완료 조건임]

다. 작업자재 규격 및 기준 : 환경관리소 SCR(선택적촉매환원장치) 내 촉매 교체작업에 필요한 필수 자재 즉, 촉매를 포함한 그 외 교체작업에 필요한 자재 및 장비 등은 업체에서 철저히 준비하여야 하며, 감독관의 지시에 따라야 한다.

※ 본 작업은 소각로 가동중지 기간내에 착공하여 완료되어야 하며, 세부적인 일정은 우리공사에서 제시하는 일정을 준수하여야 한다.

라. 작업 범위

작업 범위	비고
* 기존 촉매 4단 중 1단(9모듈) 폐기[지정폐기물 처리] 및 신규 1단 설치, 4열 내부 철판 및 Lug 설치 1) 기존 촉매 4열 36모듈 모두 탈거 2) 4열 내부 상부 철판 300*300*6t 6장 및 Lug 12~16t 6개 설치 3) SCR 내부 청소 및 보수 철판 부식방지 코팅 4) 기존 1열에 설치된 1단(9모듈) 폐기[지정폐기물처리] 5) 기존 2열에 설치된 1단을 1열로 이동 6) 기존 3열에 설치된 1단을 2열로 이동 7) 기존 4열에 설치된 1단을 3열로 이동 8) 신규 1단을 4열에 설치 9) 촉매 Cleaning 10) 시운전 포함 ※ 하자보수기간은 준공일로부터 1년으로 함	*기타 자세한 사항은 반드시 도면 참조 *작업에 필요한 기타 자재 및 장비 는 업체에서 준비*

7. 입찰참가자격 및 보증기간

가. 입찰참가자격

1) 환경기술 및 환경산업 지원법 제15조에 의한 『환경전문공사업(대기분야)』 등록증을 보유한 업체로써 최근 5년 이내 100톤/일 이상 국내 생활폐기물 소각장에  질소산화물 및 다이옥신류 제거를 위한 선택적촉매환원장치(SCR)용 촉매를 납품 및 설치한 실적이 단일건으로 추정가격의 0.5배 이상이 있는 업체이어야 하며 납품실적증명서를 전자입찰 제출 전일까지 제출하여야 한다.

2) 나라장터(G2B) 물품분류번호 10자리 1216169901(촉매제)를 공급물품으로 입찰참가 등록한 업체이어야 하며, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소기업 또는 소상공인으로 「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업 또는 소상공인확인서를 소지한 업체(전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)로서 중소기업공공구매 종합정보망을 통하여 확인 가능한 업체이어야 한다.

나. 촉매교체 후 촉매의 기계적 수명(모듈/셀의 외관, 형상의 변화 등)

※보증기간 : 교체 후 4년(우리공사에서는 촉매물품만 우선 구매하여 추후 촉매를 교체 설치한 날로부터 촉매의 기계적 수명 보증기간이 시작된 것으로 본다).

- 기계적 수명에 대한 별도의 하자보증증권은 발행하지 않아도 되며, 촉매성능에 대한 하자보증증권은 4단 중 1단만 교체하므로 1년으로 한다.

▶ 만약 물품납품 후 추후에 성능이 미달(NOx 제거효율 80% 이하)되거나 촉매의 외관 또는 기능상에 문제가 발생될 시에는 촉매물품비용을 “도급자”에게 지급하였다 하더라도 발주자는 도급자”에게 전체 비용을 환불 또는 재납품을 요구할 수 있다.

8. 작업관련 준비작업 및 특별시방(수칙)

가. 작업방법, 안전시설, 사전 준비작업 및 관련 부품의 사양 확인을 위하여 반드시 현장 확인을 실시하여야 한다.

촉매를 SCR 촉매탑에서 철거할 때 아래의 절차에 따라 작업하여야 하며 촉매의 설치방법은 촉매 철거 방법의 역순임.

1) 촉매 차입문 해체

① 먼저 보온 COVER를 제거한 다음 보온재를 분리한다.

② 투입구는 Bolt로 체결되어 있으므로 Bolt를 분리하고 투입구를 개방한다.

2) 기존 Module 모두 철거

① Module을 철거하기 위하여 먼저 간섭 요소들을 제거한다.

② 각 Module을 1set씩 꺼내어 SCR 촉매탑 상부에 설치된 전동호이스트를 이용하여 3층 바닥으로 운반한다.

③ Module을 모두 철거 후 촉매탑 내부를 철저히 청소한다.

④ 폐기할 1단의 촉매와 Module을 분리하여 마대에 담아 정리한다.

3) 기존 촉매 단 이동 재설치 및 신규 촉매 설치

① 전동호이스트 및 Hand Pallet Truck을 사용하여 촉매를 운반할 때 진동 및 충격으로부터 보호해야한다.

② 촉매를 SCR 촉매탑에 설치시 촉매가 충격으로 인해 손상되지 않도록 조심해서 취급하여야 한다.

③ 모든 단에 촉매를 설치한 후에는 촉매 모두를 에어로 Cleaning 한다.

④ 촉매를 설치한 후 SEAL을 사용하여 주변으로 GAS가 새지 않도록 철저히 Sealing을 해야 한다.

⑤ 투입구를 밀폐하고 Bolt를 체결한다.

(이때 Door에도 Sealing을 철저히 해야 한다.)

⑥ 보온을 한 다음 보온 COVER를 씌운다.

4) 촉매 설치 작업시 유의사항

① Module은 부식을 방지하기 위하여 부식 방지용 도장을 한다.

② 촉매 모듈을 충격과 진동으로부터 보호해야 한다.

③ 촉매 모듈이 수직으로 세워져서 설치될 때 촉매가 촉매탑 내부의 지지대와 접촉하는 과정에서 진동이나 충격으로 인해 손상되지 않도록 특히 조심해서 취급하도록 해야 한다.

④ 촉매의 설치 및 촉매모듈과 Sealing 작업이 완료된 후 촉매층은 완전히 청소 되어야 하며, 설치에 사용된 물건, 먼지, 기름 or 다른 오염물질은 제거해야 한다.

⑤ 촉매탑 내부의 각 부분은 철저히 Sealing 작업을 하여 연소가스가 촉매 Element 외에 다른 틈새로 새지 않도록 특별히 조심해서 수행해야 한다.

⑥ 촉매탑에서 작업시에는 반드시 쌍줄걸이 전체식 안전벨트를 착용해야 하며 촉매탑 내부 등 쌍줄걸이 안전벨트 사용이 어려울 경우 안전블록 등을 사용하여 추락사고에 대한 철저한 대비를 하여야 한다.

나. 자재는 반드시 신규 납품한 촉매 9모듈을 사용하여야 하며, 그 외의 부수자재는“도급자”에서 제공한다. 자재 및 작업관련 의문사항이 있을 경우 감독관에게 확인을 받은 후 작업을 실시하여야 한다.

입찰참가업체는 반드시 현장을 방문하여 현장 작업상황을 면밀히 점검한 후 작업여건, 공급범위, 반․출입계획, 인원투입계획, 작업상황 파악 등 본 작업을 수행함에 있어 제반사항을 충분히 비용(투찰가격)에 반영하여야 한다.

다. 운반

1) 제작공장에서 행할 수 있는 시험을 필하고, 감독관과 협의 후 현장에 반입하여야 한다

2) 운반시 기기의 파손 방지 및 외부 도장면의 보호를 철저히 할 것이며, 운반 중 안전사고에 대비하여야 한다

라. 교체 전 준비사항

1) 교체장비는 사전에 성능 점검을 한다.

2) 교체 및 설치부위의 운전 및 전원 상태를 점검한다.

마. 전기 용접(필요 시)

1) 허가된 자 이외에는 전기 용접을 하여서는 안된다.

2) 전기 용접의 야크는 전기성 안염을 일으키므로 작업자는 반드시 차광안경을 착용해야 하여 주위에 있는 자도 주의해야 한다.

3) 용접시 반드시 안전모, 안면쉴드, 앞치마, 보호장갑 등 보호구를 사용해야 한다.

4) 용접 작업시 용접주위 이면을 특히 확인할 것

5) 홀다의 절연 카바 파손시는 즉시 교환할 것

바. 고소 및 중량물 작업

1) 각 현장에서는 특히 추락 사고와 중량물 사고가 많으며, 사고 발생시는 중상 이상이므로 고소 및 중량물 작업에 종사 하는 작업자는 다음 사항을 반드시 준수해야 한다.

2) 고소 및 중량물 작업 중에는 모든 행동에 세심한 주위를 할 것이며 자신의 기량을 과신하지 말 것

3) 안전 보호구를 반드시 착용할 것.(안전모, 안전벨트)

4) 미끄러지기 쉬운 신은 사용을 금지하며 우천시나 풍설시 특히 주의할것

5) 특히 겨울철에는 철재가 얼어서 더욱 미끄럽다는 것을 잊지 말 것

6) 작업시 공구, 각종 자재, 잔재 등을 떨어뜨려 아래에 있는 사람에게 상해를 주지 않도록 특히 조심해야 한다.

7) 고소에 공구류를 둘 때에는 끈으로 매든가 적당한 용기에 넣어 안전한 곳에 두든지 걸어 두어야 한다

8) 고소에서 공구류, 각 자재의 잔재 등은 던져서는 안되고 가능하면 크레인으로 파레트에 담아서 내리고 그렇지 않을 시에는 로프에 묶어서 아래 감시자의 통제하에 내릴 것

9) 고소작업 및 중량물작업은 숙련자가 아니면 작업해서는 안된다

10) 신병 및 근심 있는자, 전일 철야 및 음주자는 작업을 해서는 안된다.

11) 작업 상면의 폭은 60㎝ 이상으로 한다.

12) 안전벨트를 설치하기 어려운 작업 위치에서는 보조 로프를 설치한 후 안전 로프 폭을 걸어 사용할 것

13) 고소 작업중에는 출입금지 구역을 설정하여 표시함과 공시에 감시원을 둔다.

14) 고소 작업이나 중량물 작업 중에는 모험을 피하고 자중할 것.

사. 비계 (족장)(필요시)

1) 비계 : 비계공에 의해서만 가설되어야 한다.

2) 비계는 사용의 목적에 따라 견고한 구조로 하고 이에 사용하는 재료는 손상 변형 또는 부식되지 아니한 것이라야 한다

3) 사용자는 높이가 2M이상인 작업 장소에는 다음 각호에 의하여 족장을 설치해야 한다.

4) 족장 설치시는 족장간의 간격은 30㎜ 이내로 할 것

5) 추락의 위험성이 있는 장소에는 높이 75㎝ 이상의 견고한 손잡이를 설치할 것.  족장은 겹쳐서 연결시는 양쪽 부분이 20㎝ 이상 겹쳐져야 하고 반드시 굳게 여물게 묶을 것

6) 2M이상 고소에서 비계를 조립, 해체 또는 변경시 다음 사항을 준수해야 한다.

7) 작업 책임자의 (현장감독차) 직접 지휘하에 작업해야 한다.

8) 조립, 해체 또는 변경의 시기, 범위 및 순서를 당해 작업에 종사하는 근로자에게 주지시킨다.

9) 조립, 해체 작업을 행하는 구역 내에는 당해 작업에 관계가 있는 자 이 외는 출입을 금지하고 잘 보이는 장소에 그 이유를 제시한다.

10) 작업중 근로자의 추락 방지를 위한 필요한 제반 조치를 한다.

11) 재료기구, 공구 등을 올리거나 내릴 때에는 로프와 포대를 사용해야 한다.

12) 발판의 로프 부분이 강판과 마찰부분이 생길 때는 그 부분에 보호물을 덮든지 감는다.

13) 한 발판에 2인 이상 작업해서는 안되며 그 위에 중량물을 올리는 것을 금한다.

14) 발판에는 무거운 것이나 철물 기타 불필요한 것을 두지 말 것

15) 발판 위에 모래, 기름, 철분, 적설 등이 있으면 제거후 작업할 것.

16) 관계자(설치자)외에 임의로 발판을 변경, 옮겨서는(이설, 제거) 안된다.

17) 발판 위에서 뛰지 말고 그리고 아래로 뛰어 내리지 말고 지정된 승강구를 이용할 것

18) 작업 전에 필히 발판을 점검 후 작업할 것

19) 안전 하중을 초과하여 작업을 해서는 안된다.

20) 족장반은 폭풍, 폭설, 기타 악천후 또는 비계 조립 일부 해체 또는 변경을 한 후에 다음 각호의 사항에 대하여 점검하고 위험의 우려가 있을 때는 지체 없이 보수하여야 한다.

① 족장의 손상 여부

② 각 부분의 연결상태

③ 손잡이의 탈락여부

④ 각 부의 침하 및 활동의 상태

아. 전기 작업

1) 공통 작업

① 복장은 항상 가볍게 하고 보호구(절연모, 절연장갑, 장화, 절연대)등을 점검 휴대하고 금속대는 몸에 휴대치 말 것.

② 땀이나 물에 젖은 몸과 의복은 감전하기가 아주 쉬우므로 전기작업은  금할 것.

③ 습기가 있거나 철물이 박혀있는 신발은 감전될 위험이 있으므로 착용해서는 안된다.

④ 전선이나 전기기구의 수리는 전공 외에는 해서는 안된다.

⑤ 모든 전기방비의 수리는 반드시 관련된 스위치에 “수리중 조작금지” 표시를 부착하고 필요하면 시근 장치를 채우고 작업에 임해야 한다.

⑥ 100볼트 저압이라도 신체와 대지간에 절연상태에 따라 치명적인 피해를 입는다는 것을 명심할 것

⑦ 전기로 작동하는 기기는 담당자 외에 작동해서는 안된다.

⑧ 각 전기기의 설치장소(변전실 등)는 관계자의 출입을 금한다.

⑨ 우천시에는 절대로 고압기기나 고압선로의 1.2M내에는 절대 접근을 금한다.

⑩ 반드시 전원의 유무를 확인하고 작업에 임할 것

자. 설치 및 철거 작업

1) 설치작업은 계약기간 중에 완료하여야 한다.

2) 기기의 설치는 책임기술자 입회하에 감독관의 지시에 따라야 한다.

3) 설계서에 누락된 자재일지라도 설치에 필요한 부품 및 자재는 계약자가 공급하여야 한다

4) 기초도면, 설치도면, 기기외형도, 부품도면, 현장에서의 자재 운반 루트 등 계약자는 설치에 관련된 자료들을 잘 숙지하여 원활한 설치 작업이 가능토록 하여야 한다.

5) 전기설비의 해체, 결선 등 전기작업은 발주처의 전기설비 담당자의 입회하에 실시한다.

6) 설치되어 있는 장비류의 철거는 감독관과 협의 하에 철거작업을 행하여야 한다.

7) 보온재는 기존 제품을 분해 후 재활용하되 , 폐보온재 발생시 별도로 마대에 담아서 배출하여야 한다.

8) 철거대상 장비류는 철거 시 원상이 손상되지 않도록 하고, 파손으로 인한 재료 손실에 대하여는 계약자가 변상 조치하여야 한다.

9) 철거된 장비류는 감독관이 지정한 장소에 보관하여야 하며, 지정한 장소에 운반 및 도급기간 중 보관에 대한 책임을 진다

차. 시운전

1) 설계당시 제작사양서에 표시된 각 기기의 성능을 확인할 목적으로 행한다

2)“도급자”는 납품한 제반 기자재 및 설비에 따른 시운전을 수행하여야 하며, 전체 공정에 대한 시운전 시 원활한 시운전을 위해 감독관에게 최대한 협조하여야 한다.

3)“도급자”는 설치완료 후 “발주자” 운전원에게 충분히 숙지할 수 있도록 교육을 실시하여야 한다.

카. 작업안전관리

1)“도급자”는 작업시 신규안전각서와 작업일보를 제출하여야 한다.

2) 작업시 주변을 오염시켜서는 안되며, 주변오염으로 인한 민형사상 책임은 “도급자”에게 귀속된다.

3) 작업시 발주자의 시설물에 손상을 초래하여서는 안되며, 손상 초래시“도급자”는 즉시 원상복구한다.

4) 작업시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에 대한 책임은 전적으로 “도급자”에게 귀속된다.

5) 각 작업별 안전에 대한 대책을 철저히 수립하여야 한다.

6)“도급자”는 종업원 중에서 책임자를 지정하여,“발주자”감독관의 작업지시를 준수하게 하고, 작업 중 안전보건상의 업무를 수행토록 하며, 안전사고로 인하여 문제가 발생되었을 때 “도급자”가 전적인 책임을 진다

9. 기타사항

가.“도급자”는 제작, 납품 완료후“도급자”의 잘못으로 인해 발생하는 모든 문제에 대해 수정 및 필요시 재제작토록 한다.

나.“도급자”는 본 시방서에 명시되지 않은 항목일지라도 추후 발생하는 시험 및 검사 항목에 대해“발주자”에게 협조하여야 한다.

다.“발주자”는 제작전/제작중/납품후 일지라도 필요에 따라“도급자”에게 회의 참석을 요구할 수 있으며 “도급자”는 요청서류를 성실히 작성하여 회의에 참석하여야 한다.

라.“도급자”는 시방서상의 문구 해석 등 기타 의견이 있을 때는 사전 “발주자”와 협의하여 지시에 따라야 한다.

마. 각종 시험 및 검사 결과서를 제출하여야 하며 상세 사항은 계약 후 별도 협의한다.

바. 규격 및 성능이 미달된 물품입고로 문제발생시“도급자”는 전적으로 책임을 지며 또한 제기능에 맞게 보상하여야 한다.

사.“도급자”는 물품 납품․입고시 제반서류를 함께 제출하여야 한다.

아. 물품의 납품․입고시 주변을 오염시켜서는 안되며, 주변오염으로 인한 민형사상 책임은“도급자”에게 귀속된다.

자.“도급자”는 물품의 납품․입고시“발주자”의 시설물에 손상을 초래하여서는 안되며, 손상 초래시“도급자”는 즉시 원상복구해야 한다.

차. 물품의 납품 및 입고시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에 대한 책임은 전적으로“도급자”에게 귀속된다.

카.“도급자”는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청할 수 없다.

타. 본 물품의 구매(교체포함)계약과 관련하여 지득한 기밀은 “발주자”의 허락없이 일절 공개하여서는 안되며 이의사유로 발생된 모든 책임은 “도급자”가 진다.

파.“도급자”는 설계상 또는 제작상의 원인과 작동불량으로 발생되는 하자에 대해서는 수리 또는 부품을 교환하여 정상적인 제품으로 속히 작동 될 수 있도록 조치하여야 한다.

하.“도급자”는 소모품에 대한 세부 품목을“발주자”에게 제공하여야 한다.

거. 결함의 보수는 결함의 성격이 상세히 보고되어야 하고, 보수방안은“발주자”의 승인을 득한 후 작업해야 하며, 가공 후 발생하는 결함에 대해서도“도급자”가 수정 작업을 하여야 한다.

너.“도급자”는 물품납품 및 작업관련 업무에서 발생하는 일체의 사고(보상, 부담 등)에 대하여 민․형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사업에 지장이 없도록 조치하여야 한다. 위 규정에도 불구하고 “발주자”가 도급자”의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등 책임을 부담하였을 경우 “도급자”는 “발주자”가 부담하는 전액을 “발주자”에게 상환하여야 한다.

더. 본 시방서의 내용은 현장 여건에 따라 발주자와의 협의에 의해 변경 시행 될 수 있다.

러. 물품납품비용 지급은 최종 납품(또는 교체)이 완료된 후“도급자”의 청구에 의해“발주자”는 물품비용을 지급하는 것을 원칙으로 한다.

머. 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할 법원은 소재지관할 민사 지방법원으로 한다. 끝.