복합생활스포츠타운

조경 유지관리 공사 시방서

시  방  서

1. 과 업 명 : 복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사

2. 과업개요

1) 위    치: 복합생활스포츠타운 동산 및 둘레길

2) 목    적: 복합생활스포츠타운 동산 및 둘레길 녹지 공간에 잡초가 웃자라고 넝쿨이 우거져

공원 미관개선과 관상목의 양호한 생육을 위해 조경구역 제초작업을 하는데

목적이 있다.

3) 과업기간: 2021. 6. ~ 11. 30.

과업은 3회 실시하며, 1회 작업일수는 20일 이내로 한다.

4) 대금지급: 각 회차별 공사완료 후 대금 지급

5) 군포도시공사를 “발주자”라고 칭하고 전문 조경업체 대표를 “도급자” 라고 칭한다.

3. 견적제출 참가자격

1) 건설산업기본법령에 의한『조경식재공사업』면허(등록)소지 업체로서 견적가격

제출 공고일 전일로부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 계속하여 주된 사무소가

군포시에 소재한 업체이어야 한다.

2) 조달청  나라장터정보시스템(G2B) 이용자 등록을 필한 업체이어야 한다.

3) 미 자격자가 고의로 견적제출에 참가하여 무효인 견적가격제출을 하였다고 판단될

경우에는 관계 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있다.

4. 견적제출 관련 규정숙지

1) 견적제출에 참가하고자 하는 자는 본 견적제출 공고와 다음 적용규정을 숙지하여야

하며, 미숙지로 인한 책임은 견적제출자에게 있다.

2) 견적제출 참가자는 관련회계예규, 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준,

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준, 지방자치단체 수의계약 운영요령, 지방자

치단체 공사ㆍ공사계약 일반조건 및 계약특수조건, 설계서, 과업지시서, 기타

필요한 모든 사항을 견적제출 전에 완전히 숙지하고 참가하여야 하며, 숙지하지

못한 경우 발생한 책임은 제출자에게 있다.

5. 과업내용

1) 과업범위

○ 제초작업

- 예초작업면적: 11,329㎡

- 인력제초 작업면적: 4,989㎡

- 제초횟수: 3회

- 주요내용

‣ 조경구역 일체 제초작업

‣ 관상목, 철쭉주변 잔풀 뽑기

○ 관목전정

- 대상면적: 3,505㎡

- 관목성 전지작업: 2회(칡넝쿨, 가시넝쿨)

‣ 동산 2개소 절개지 칡넝쿨 제거

‣ 절개지 가시넝쿨 제거

2) 과업수행조건

○ 계약 체결 후 각 회차별 공정에 대해서 발주자와 일정을 협의하여야 하며,

각 회차별 작업일수는 20일 이내로 한다.

○ 작업 전 도급자는 작업인부의 안전교육을 실시하여야 하며, 위생 및 안전에

필요한 개인장구(보호구)를 지급하여야 한다.

○ 폭염 및 발주자의 요청이 있을 경우에는 즉시 작업을 중단하여야 한다.

3) 작업방법

○ 제초작업

- 기계(예초기)제초를 원칙으로 하여 작업을 실시한다.

- 경사면 작업으로써 안전사고에 유의하며, 제초 시 관상목 및 미관개선을 위해

식재된 수종의 훼손에 주의하여 작업을 실시한다.

- 수목 하부 칡넝쿨은 낫으로 제거한다.

- 나무 및 경계석 사이 잡풀은 낫이나 호미를 이용하여 제거한다.

○ 일일 청소마감

- 제초부산물은 갈퀴를 이용하여 긁어모아 마대에 담거나 노끈으로 묶어

이동이 편리하도록 정리한다.

- 페트병 등 쓰레기 류 발견시 마대에 담아 정리한다.

- 외부 시민들에 노출된 장소이므로, 도급자는 당일 작업 종료 이전 정리정돈          및 마감청소를 필히 실시한다.

○ 제초 부산물 처리

- 제초부산물은 차량으로 이동하여 폐기처리 하고 처리 필증을 제출한다.

6. 일반 사항

1) 본 과업지시서는 공사수행을 위한 일반사항을 규정한 것으로써 이에 규정되지

않은 사항은 관계법령과 정부규정 및 각종시방서를 기준하여 발주처의 감독관과

사전에 협의 후 정하는 바에 따른다.

2) 발주처의 감독관이 필요하다고 인정할 때 관계기관 또는 부서와의 협의 등 작업추진

사항을 즉시 보고하여야 한다.

3) 도급자는 공사 중에 발주처의 감독관이 부실 또는 부정이라 지적한 감독관의

지시에 따라 즉시 재시공 또는 보완시공을 하여야 한다.

7. 경미한 변경

현장 여건과 공사관계로 위치 및 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량

증감 등 경미한 변경은 발주처의 감독관의 승인을 받아 설계 변경을 시행하며 도급 금액은

증감하지 아니할 수 있다.

8. 계약변경조건

1) 설계변경으로 공사 중단 지시를 한때

2) 천재지변으로 인하여 공사를 수행치 못한 때

3) 공법등 계획이 변동될 때

4) 기타 부득이 시공기간 연장이 타당하다고 인정될 때

9. 용어의 해석

1) 본 과업지시서의 내용에 해석차이가 있을 시, 발주자의 해석에 따른다.

2) 본 과업지시서에 명시되어 있지 않은 사항에 대하여는 일반적인 관행을 따른다.

10. 현장관리 및 보호시설

1) 본 과업을 수행함에 있어 도급자는 안전관리에 만전을 기하여야 하고 산업안전

보건법, 발주처의 안전작업 규칙 및 기타 안전수칙을 준수하여야 하고 제반 사고에

대하여는 도급자가 책임을 지고 도급자 부담으로 복구 및 변상 하여야 한다.

2) 과업에 필요한 안전조치는 관계법규 및 규정에 따라야 하며, 안전에 만전을

기하기 위한 조직, 계획, 점검 등을 실시하여야 하고 필요한 제반장비를 갖추어야 한다.

3) 작업 장소 내에서는 안전장구를 착용하여야 한다.

4) 작업장에는 구급약을 상비하여 응급처치를 할 수 있도록 해야 한다.

5) 도급자는 안전조치를 충분히 한 후 과업을 실시하여야 하며 공사 중 과실 또는

고의로 인하여 발생하는 안전사고, 화재 등으로 인명 또는 재산상의 피해가

발생하였을 때에는 도급자가 책임을 지고 도급자의 부담으로 복구 및 변상하여야 한다.

11. 도급자 준수사항

1) 도급자는 발주자의 감독 또는 지시에 따라서 공사현장의 모든 사항을 처리하여야 한다.

2) 발주자는 도급자에 대하여 다음과 같이 필요하다고 인정하는 기간동안 공사의 전부

또는 일부의 중지를 명할 수 있으며, 공사 중지로 인한 손해는 도급자의 부담으로 한다.

□ 설계서 또는 발주자의 지시에 응하지 않은 상태로 시공 할 때

□ 안전에 문제가 있다고 인정될 때

□ 다른 공사로 인해 공사 계속이 부당하다고 인정 될 때

3) 도급자는 공사구역 내 기존시설물에 대해 최대한의 주의를 기울여 훼손되지 않도록

시공관리를 하여야 하며, 시설물을 손상시켰을 경우에는 도급자의 자체비용으로

이를 원상복구하거나 변상하여야 한다.

4) 공사에 관련된 법령, 조례 및 규칙 등을 반드시 준수하여야 한다.

5) 작업인부에 대한 제법규의 운용과 적용은 도급자의 책임하에 이루어지고 사용하는 모든

작업인부의 행위에 대해서는 도급자가 책임져야 한다.

12. 제출서류

1) 본 사업의 도급자는 작업개시 전에 착공계, 현장대리인계, 예정공정표 및 기타

소정규정에 의한 제반 서류를 발주자 또는 발주처의 감독관에게 제출하여야 한다.

2) 본 사업의 도급자는 사업 착공전 전경주요부분, 작업중 전경 및 공사완료 후

준공전경을 각2부씩 작성하여 발주처의 감독관에게 제출하여야 한다.

(사진의 규격은 사업장 여건에 따라 감독이 지정하여 전부 칼라사진으로 제출

하여야 한다.)

3) 도급자는 작업기간 중 작업현황, 인원동원 상황의 일보를 발주처의 감독관이

지시하는 양식에 따라 제출하여야 한다.

13. 공사완료 후 제출서류

각 회차별 공사가 완료된 후 도급자는 즉시 보고서 및 제반 서류를 제출한다.

1) 공사완료보고서 2부

2) 공사완료사진 2부

3) 기타 우리공사가 준공에 필요하다고 인정하는 서류.  끝.