- 시  방  서 -

군포환경관리소

소각로 내화물 연간 보수공사

2021. 3.

	군 포 도 시 공 사

1. 적용범위

본 시방서는 군포환경관리소 소각설비의 내화물 시공에 적용된다.

시방서에서 언급되지 않았거나 적용이 안 되는 부분에 대해서는 감독자와 협의한 후 결정하며, 공사관련 문서 중 다른 문서에 우선하여 적용한다.

2. 목 적

본 시방서는 빈번한 가동중지에 따른 소각로의 경우 내화물 시공의 잘못에 따라 로의 수명과 소각설비의 안정적인 운전에 중대한 영향을 미치기 때문에 본 시방서 내용을 충분히 숙지하여 내화물 시공을 함으로서 시공 잘못으로 인한 가동중지를 사전에 방지하여 소각장 가동을 원활히 하는데 있다.

3. 용어의 정의

가. 본 공사와 관련하여 군포시시설관리공단을 “발주자”라 칭하고

사업수행자(공사 업체)를 “계약자”라 칭한다.

나. 본 공사의 설계 및 시공을 담당하는 우리공단 직원을 “감독자”라 칭한다.

1) 감독자의 직위 및 성명은 발주자가 계약자에게 통지한다.

2) 계약자가 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시

감독자를 경유해야 한다.

4. 공사 개요

가. 공 사 명 : 소각로 내화물 보수공사(연간계약)

나. 공사위치 : 경기도 군포시 초막골길 101-58 공장동

다. 계약기간 : 계약일로부터 ~ 2021. 12. 31

※소각로 가동중지기간(상·하반기 각 1회) 및 긴급보수 발생시 시공

라. 공사물량 : 내화물 40㎡(시공두께 80mm 기준) + 몰탈(SP3000) 20㎡

+ 클링커제거 40㎡(두께 30mm미만 면적 제외)

+ 폐기물처리 36톤(운반비, 분석비 1회 포함)

[공사물량은 1년간 예정량으로 운영상황에 따라 증․감 될 수 있으며,

예정량을 초과하거나 적게 시공 할 경우에도 이의를 제기할 수 없다.

단, 초과 시에는 계약단가에 의해 별도정산(계약 후 단가내역서 제출)]

마. 계약자의 의무

계약자는 소각로 가동중지 직후에 감독자와 공사범위를 확인한 후

바로 공사할 수 있도록 사전준비를 철저하게 하여야 한다.

※환경관리소 소각로 내화물 보수공사는 소각로 가동정지 후에 보수할 부위를

확인하여 소각로 내부에서 실시하는 공사로써 다른공사와 간섭되지 않도록

가동중지 기간 내 감독자와 일정을 협의하여 추진하여야 한다.

바. 공사범위

공사 범위

1. 공사범위는 소각로 및 관련 설비의 내화물시공 모든 부위가 해당된다.

2. 시공방법은 비계설치/클링커 제거/앵커, 형틀/내화물 및 몰탈로 시공한다.

3. 공사금액에는 주자재 내화물, 부자재 몰탈(SP3000), 앵커, 부속자재 및

인건비, 비계설치, 경비, 부가세 등을 포함한다.

단, 산업안전보건관리비는 사유 발생 시 별도 정산한다.

4. 공사시 발생한 폐내화물 처리(분석, 운반, 처리포함)사항을 포함한다.

사. 자재규격

품질/규격		주 요 자 재 명	비 고
		CRESTO-75
최고사용온도(℃)		1700	CRESTO-75 또는 CRESTO-75 동등이상의 재질을 가진 제품
선변화율	(110℃, 24시간)	-
	(1000℃×3시간)	-
	(1350℃×3시간)	-0.20
	(1500℃×3시간)	-0.40
압축강도		1500℃/3시간, 1000(150)
열전도율(㎉/m.h)		250℃/1.1
화학성분(%)		Al2O3 75

※ 모든 제품은 KS인증제품 및 신품사용을 원칙으로 한다.

아. 입찰참가자격

건설산업기본법에 의한 전문공사업종 중 난방시공업(3종) 등록을 필하고

법인등기부상 본점 소재지가 경기도 내에 있는 업체이어야 한다.

자. 현장설명회

별도의 현장설명회는 개최하지 않으나 입찰참가업체는 반드시 현장을 방문하여

현장 상황 및 작업여건을 면밀히 검토한 후 공급범위, 설비 반․출입계획,

인원투입계획, 작업방법 파악 등 본 공사를 수행함에 있어 제반사항을

충분히 공사비에 반영하여야 한다.

5. 공사준비작업

가. 보관관리

- 현장에 반입되는 자재는 규격 및 수량 또는 운반시의 결함을 체크하여        불량품이 있으면 교체조치 한다.

- 보관 중에 비 또는 습기로부터 보호될 수 있도록 창고에 팔레트로 적재

하여 보관한다.(부정형 내화물은 제조 일로부터 6개월 이내 제품사용을

원칙으로 한다)

나. 가설공사

- 비계는 안전에 문제가 없고 작업이 용이하도록 설치한다.

(자재 및 장비, 작업자 하중을 고려하여 견고한 비계 설치)

- GRATE 표면은 중량물의 충격에 손상이 가지 않도록 한다.

다. 시공 전 준비사항

- 시공 장비는 사전에 성능 점검을 한다.

- 시공 부위의 ANCHOR 및 SUPPORT류 설치 상태를 점검하고 탈락된 부위는

재시공한다.

- MORTAR 교반 장소는 우천에 대비하여 별도 장소를 확보한다.

라. CASTABLE 내화물 시공

- 시공에 필요한 혼련시간, 혼련수분, 수질의 적합여부, 앵커의 선택 및

설치방법, 팽창대설치, 시공방법, 양생건조 및 승온 등의 내용을 파악        하여 적절히 대처할 필요가 있다.

- CASTABLE 내화물은 다른 내화물에 비해 시공의 양, 부에 따라 시공 성        능이 크게 좌우되므로 충분한 주의가 요구된다.

- CASTABLE 시공 방법은 형틀에 유입하는 방법(CASTING METHOD)

CASTABLE 시공시 주의해야할 기본 사항에 대하여 언급하고자 한다.

CASTABLE 내화물의 유입시공은

형틀설치 → CASTABLE MIXING → 시공 → 양생 → 형틀제거(탈형)

→ 자연건조 → 가열건조 순으로 하는 것을 기본으로 한다.

6. 공사 특별수칙

가. 본 공사는 보수하여야 할 주변에 비계를 설치하여야 하며 하드클링커

제거작업과 내화물 시공 및 몰탈(SP-3000) 도포작업을 병행하여야 한다.

나. 본 제품의 모든 용접부는 용접유자격자가 용접하여야 하며, 기존 제품과

품질 및 기능면에서 동등하거나, 그 이상이어야 한다.

다. 본 공사는 기존에 설치된 시설에 보강 및 보수공사를 하는 작업으로

작업장 주변에 많은 설비와 구조물이 설치되어 있는 상태이며,

타 공정과의 간섭이 발생될 수 있으므로 공정계획을 철저히 수립한다.

라. 각 작업별 안전에 대한 대책을 철저히 수립하여야 한다.

마. 전기설비의 해체, 결선 등 전기 작업은 발주자의 전기설비 담당자의           입회하에 실시한다.

※ 공통사항(수칙)

가. 작업방법, 안전시설, 사전 준비작업 및 관련 부품의 사양 확인을 위하여         반드시 현장 확인을 실시하여야 한다.

나. 공사시방서 또는 도면에 명기된 규격의 제품 및 자재는 반드시 KS인증

제품 및 신품사용을 원칙으로 한다.

다. 철거된 설비 및 자재는 각 부품별로 정리하여 감독자의 육안점검이 끝   난 후에 지시에 따라 처리하고, 신규 설비 및 자재들은 반드시 검수를   득한 후에 작업에 투입하여야 한다.

라. 설비를 보수공사 작업하기 전에 철거 전/후를 사진촬영하여 감독자에게         제출해야 한다.

마. 자재에 유해성분이 있을 경우에는 경고표시 및 안전관리에 대한 교육을   철저히 하며, 안전띠 등을 이용하여 사람의 접근을 금지시킨다.

바. 철거한 설비 및 폐자재는 주변설비의 오염을 방지하기 위하여 발생 즉         시 수거하고 감독자의 지시에 따라 지정된 장소로 이동시켜 보관한다.

사. 운반

- 제작공장에서 행할 수 있는 시험을 필하고, 감독자와 협의 후 현장에         반입하여야 한다

- 운반시 기자재의 파손 방지 및 외부 도장면의 보호를 철저히 할 것이         며, 운반 중 안전사고에 대비하여야 한다.

아. 공사 전 준비사항

- 공사 장비는 사전에 성능점검을 한다.

- 설비의 운전 및 전원 상태를 점검한다.

자. 전기 작업

- 복장은 항상 가볍게 하고 보호구(절연모, 절연장갑, 장화, 절연대)등          을 점검 휴대하고 금속대는 몸에 휴대치 말아야 한다.

- 땀이나 물에 젖은 몸과 의복은 감전하기가 아주 쉬우므로 전기작업은

금해야 한다.

- 습기가 있거나 철물이 박혀있는 신발은 감전될 위험이 있으므로 착용          해서는 안 된다.

- 전선이나 전기기구의 수리는 전공 외에는 해서는 안 된다.

- 모든 전기장비의 수리는 반드시 관련된 스위치에 “수리  중 조작 금지”

표시를 부착하고 필요하면 시건장치를 채우고 작업에 임해야 한다.

- 100볼트 저압이라도 신체와 대지간에 절연상태에 따라 치명적인 피해          를 입는다는 것을 명심하여야 한다.

- 전기로 작동하는 기기는 담당자 외에 작동해서는 안된다.

- 각 전기기의 설치장소(변전실 등)는 관계자 외 출입을 금한다.

- 우천시에는 절대로 고압기기나 고압선로의 1.2M내에는 절대 접근을            금한다.

- 반드시 전원의 유무를 확인하고 작업에 임해야 한다.

차. 고소 및 중량물 작업

- 각 현장에서는 특히 추락 사고와 중량물 사고가 많으며, 사고 발생시           는 중상 이상이므로 고소 및 중량물 작업에 종사하는 작업자는               다음 사항을 반드시 준수해야 한다.

- 고소 및 중량물 작업 중에는 모든 행동에 세심한 주위를 할 것이며           자신의 기량을 과신하지 말 것.

- 안전 보호구를 반드시 착용할 것.(안전모, 안전화, 안전벨트 등)

- 미끄러지기 쉬운 신발은 사용을 금지하며 반드시 안전화를 신을 것.

- 특히 겨울철이나 기름이 있는 철재가 얼거나 미끄러워서 더욱 주의            해야 한다는 것을 잊지 말 것.

- 작업시 공구, 각종 자재, 잔재 등을 떨어뜨려 아래에 있는 사람에게           상해를 주지 않도록 특히 조심 할 것.

- 고소에 공구류를 둘 때에는 끈으로 매달거나 적당한 용기에 넣어 안전           한 곳에 두거나 걸어 둘 것.

- 고소에서 공구류, 각 자재의 잔재 등은 던져서는 안 되고 가능하면 크          레인으로 팔레트에 담아서 내리고 그렇지 않을 시에는 로프에 묶어           서 아래 감시자의 통제 하에 내릴 것.

- 고소작업 및 중량물작업은 숙련자가 아니면 작업하지 말 것.

- 신병 및 근심 있는자, 전일 철야 및 음주자는 작업하지 말 것.

- 안전벨트를 설치하기 어려운 작업 위치에서는 보조 로프를 설치한 후          안전 로프를 걸어 사용할 것.

- 고소 작업이나 중량물 작업중에는 모험을 피하고 자중할 것.

카. 시운전

- 설계당시 제작사양서에 표시된 각 기기의 성능을 확인할 목적으로 행         한다.

- 계약자는 납품한 제반 기자재 및 설비에 따른 시운전을 수행하여야 하         며, 전체 공정에 대한 시운전 시 원활한 시운전을 위해 발주자의 감독         자에게 최대한 협조하여야 한다.

- 계약자는 공사완료 후 주의사항을 발주자의 운전원이 충분히 숙지할          수 있도록 교육을 실시하여야 한다.

7. 공사 착공 및 결과보고

가. 계약자는 공사시 신규안전각서와 공사일보를 제출하여야 한다.

나. 공사 착공시 관련서류를 다음과 같이 제출하여야 한다.

① 착공계 및 공사일정표/인원투입계획서/안전관리계획서 각 2부

② 기타 공사 및 계약과 관련된 서류 각 2부

다. 공사가 완료 된 후 준공 일로부터 7일 이내에 준공계 및 제반서류를         제출한다.

① 준공계 2부

② 공사 완료보고서 2부(하자보증서 포함)

③ 공사 완료보고서에는 다음사항이 명기된다.

1) 공사개요

2) 사진철(제작 및 교체공정별, 설비별 공사 전/후 비교사진)

3) 점검/측정/시운전 등과 관련된 자료 및 기타 필요한 서류

8. 기타사항

가. 계약자는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청할 수 없다.

나. 본 공사와 관련하여 지득한 기밀은 발주자의 허락없이 일절 공개하             여서는 안 되며 이의사유로 발생된 모든 책임은 계약자가 진다.

다. 시방서 및 도면 등에 특별히 명기되지 않은 사항이라도 공법 상               당연히 시공을 요하는 경미한 사항 또는 시공상 결함발생에 대한             조치 등은 계약자 부담으로 한다.

라. 계약자는 자재의 반입 및 교체시 제반 안전조치를 다하여야 하며,       안전사고에 대한 책임은 전적으로 계약자에게 귀속된다.

마. 본 공사시방서의 내용은 현장 여건에 따라 발주자와의 협의에 의해      변경 시행 될 수 있다.

바. 계약자는 시방서상의 문구 해석 등 기타 의견이 있을 때는 사전에         발주자의 감독자와 협의하여 지시에 따라야 한다.

사. 물품의 반입 또는 교체시 주변을 오염시켜서는 안 되며, 주변 오염

으로 인한 민형사상 책임은 계약자에게 귀속된다.

아. 계약자는 물품의 반입 또는 교체시 발주자의 시설물에 손상을 초래         하여서는 안되며, 손상 초래시 계약자는 즉시 원상복구하여야 한다.

자. 계약자가 공사관련 업무에서 발생하는 일체의 사고(보상, 부담             등)에 대하여 민․형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사업에         지장이 없도록 조치하여야 한다. 위 규정에도 불구하고 발주자가           계약자의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등 책임을         부담하였을 경우 계약자는 발주자가 부담하는 전액을 발주자에게 상         환하여야 한다.

차. 본 계약과 관련하여 발생하는 분재에 대한 관할법원은 발주자 소재지

관할 민사 지방법원으로 한다.

공사 시방서 공통 수칙

1. 정비, 보수작업 시 준수사항

정비, 보수작업 현장에 출입하는 모든 근로자가 아래 사항을 준수하도록 관리하여야 한다.

(1) 모든 작업은 안전작업허가를 받은 후에 작업하여야 한다.

(2) 발주처의 안전기준 또는 수칙 등을 엄격하게 준수하여야 한다.

(3) 수행하는 작업이 특별안전보건교육 대상 작업일 경우 사전에 특별안전보건교육 실시결과를 제출하여야 한다.

(4) 최초로 발주처에 출입하는 계약업체 근로자는 발주처의 신규출입자 안전교육 이수 후 작업장에 배치되어야 한다. (자체 실시한 경우에는 교육실시 근거 제출)

(5) 현장에 설치하는 모든 임시시설(예, 현장 가스용기 보관소 등)은 사전에 설치허가를 받고, 설치 후 원청업체의 사용허가를 받은 후에 사용하여야 한다.

(6) 작업차량 출입 시는 경비실 근무자의 지시에 따라 지정된 장소로 통행하여야한다.

(7) 지정되지 않은 장소에서 흡연하지 않도록 관리하여야 한다.

(9) 작업 전에 작업에 투입되는 모든 근로자에게 해당 작업의 위험성 및 대책, 안전한 작업방법 등을 교육시켜야 한다.

(10) 계약업체 관리자 또는 안전담당자는 하루 2회 이상 해당 작업장을 정기적으로 순찰하고, 작업 종료 시는 현장을 재확인하여야 한다.

(11) 고의적으로 안전과 관련된 중요한 사항을 위반하는 작업자는 퇴사 조치 등의 조치를 하여야 한다.

(12) 근로자들에게 지급한 안전보호구 착용상태를 수시로 확인하고 노후 보호구는 교체 지급하여야 한다.

(13) 사고 발생 시 지체 없이 안전관련 부서에 신고하여야 한다.

(14) 작업 전, 점심식사 후 음주여부를 측정하여야 한다.

(15) 작업 중 및 작업 후에 통로 또는 계단 등에 통행에 불편을 초래하는 적재물을 방치하지 않아야 한다.

(16) 화기 작업 시에는 반드시 소화기를 비치하여 작업을 실시한다.

(17) 고소 작업 시에는 반드시 작업에 적합한 2줄거리 안전대를 사용하여 작업하여야 한다.